정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(2021-33) 서남권 친환경수산종합지원단지 조성
② 추진배경	목포 내항에 위치한 어항기능이 국가계획에 의해 북항으로 이전하게 됨에 따라 수산물의 생산ㆍ가공ㆍ유통ㆍ물류기능을 종합적으로 지원하는 수산종합지원단지 조성
③ 사업개요	❍ 사업규모 : 부지 101,951㎡, 건축연면적 14,640㎡(지상4층) ❍ 총사업비 : 37,942백만원 ❍ 주요내용 : 위판장(선어, 새우젓), 가공시설, 냉동ㆍ냉장, 제빙ㆍ저빙, 판매장, 보급창고, 유류공급시설 등
④ 사업부서	수산진흥과		⑤ 담당자		해양수산6급 강복주 수산진흥과장 이영예
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입 사업		⑦ 사업기간		2014 ~ 2020
<그간 주요 추진내용>
❍ 사업준공		’20. 12		해수부 임태훈 과장 김지현 사무관 신재균 주무관 전남도 이종연 팀장 김영선 주무관 목포시 이근직 수산진흥과장 강복주 주무관
❍ 총사업비 조정 - 37,259백만원(증 5,197) - (자율)2,087백만원 - (협의)3,110백만원		‘19.12		해수부 황준성 과장 조병열 사무관 최수경 주무관 전남도 나은경 팀장 최재영 주무관 목포시 이근직 수산진흥과장 강복주 주무관
❍ 총사업비 조정(사업기간 연장) - 32,062백만원(증 1,480) - 당초 ‘14~’19, 변경 ‘14~’20		‘18. 12		해수부 하두식 과장 양정규 사무관 최수경 주무관 전남도 곽영호 팀장 주우영 주무관 목포시 이근직 과장 김일섭 담당
❍ 총사업비 조정 - 30,582백만원(증 1,153)		‘18. 6		해수부 하두식 과장 양정규 사무관 최수경 주무관 전남도 곽영호 팀장 주우영 주무관 목포시 정효진 과장 김일섭 담당
❍ 총사업비 조정(사업기간 연장) - 당초‘14 ~’18, 변경‘14 ~’19		‘17. 12		해수부 하두식 과장 양정규 사무관 최수경 주무관 전남도 곽영호 팀장 주우영 주무관 목포시 정효진 과장 김일섭 담당
❍ 총사업비 자율조정 승인 - 당초 35,612백만원, 변경 29,429백만원		‘17. 10		해수부 하두식 과장 양정규 사무관 최수경 주무관 전남도 곽영호 팀장 주우영 주무관 목포시 정효진 과장 김일섭 담당
❍ 공사착공 보고회		‘17. 09		조달청장 감리단장 시공사 목포수협장
❍‘17년 보조금 교부결정 및 송금		‘17. 06		정효진 과장 이근직 담당
❍‘16년 보조금 교부결정 및 송금		‘16. 12		이영권 과장 이근직 담당
❍ 선급금 지급		‘16. 12		목포수협장
❍ 공사, 감리용역 계약		‘16. 12		조달청장 목포수협장
❍ 실시설계 총사업비 조정심의		‘16. 10		해수부 강태구 사무관 목포수협장 목포시 정효진 과장 이근직 담당
❍ 중간설계 총사업비 조정심의		‘16. 09		해수부 강태구 사무관 목포수협장 목포시 정효진 과장 이근직 담당
❍ 실시설계 2차 적정성검토 합동 토론회		‘16. 09		조달청장 목포수협장 목포시 정효진 과장 이근직 담당
❍ 실시설계 1차 적정성검토 합동 토론회		‘16. 08		조달청장 목포수협장 목포시 정효진 과장 이근직 담당
❍ 건축심의		‘16. 04		서태빈 건축행정과장 윤주명 담당
❍ 비관리청항만공사 시행허가 승인		‘16. 03		목포지방해양수산청장
❍ 조달청 관급자재 심의		‘16. 03		조달청장 목포수협장 정효진 과장 이근직 담당
❍ 기본설계 완료보고 및 총사업비 조정협의		‘16. 02 ‘16. 08		해수부 강태구 사무관 목포수협장 목포시 정효진 과장 이근직 담당
❍ 총사업비 및 사업계획 확정		‘16. 01		해수부 강태구 사무관 목포수협장 목포시 정효진 과장 이근직 담당
❍‘15년 보조금교부 결정 및 송금		‘15. 12		정효진 과장 이근직 담당
❍ 총사업비 등 사업계획 조정협의		‘15. 12		해수부 김주성 사무관 목포수협장 목포시 정효진 과장 이근직 담당
❍ 중간설계 적정성 검토 합동토론회		‘15. 11		조달청장 ㈜범건축 목포시 정효진 과장 이근직 담당
❍ 사업규모 재조정		‘15. 10		목포수협장 ㈜범건축
❍ 총사업비 조정방안 협의		‘15. 08		조달청 목포수협장 ㈜범건축 목포시 정효진 과장 이근직 담당
❍ 중간설계 검토		‘15. 08		목포수협장 ㈜범건축 목포시 정효진 과장 이근직 담당
❍ 계획설계도서 적정성 검토		‘15. 06		조달청장 목포수협장 ㈜범건축
❍ 기본 및 실시설계 용역		‘15. 03		㈜범건축
❍ 교통영향평가, 개선대책 용역		‘15. 03 ‘15. 11		조달청장 목포수협장 ㈜원우기술개발
❍ 기본 및 실시설계 용역		‘15. 02		조달청장 목포수협장 ㈜범건축
❍ ‘14년 보조금교부결정 및 송금		‘14. 12		정효진 과장 이근직 담당
❍ 조달청 맞춤형서비스 협약		‘14. 10		조달청장 목포수협장
❍ 신규사업 예산확정		‘14. 01		해수부 김성수 과장 김주성 사무관 전남도 황통성 사무관 목포시 정효진 과장 이근직 담당
❍ 기본계획 및 타당성조사 용역		‘11. 12		목포수협장 KMI 주문배