정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(2022-06) 용해지구 문화시설 건립사업
② 추진배경	용해지구 대규모 아파트 단지 조성으로 인구가 계속해서 증가함에 따라 지역주민들의 도서관 문화시설 필요성 제기
③ 사업개요	❍ 사업위치 : 목포시 용해동 997-1번지 ❍ 사업규모 : 부지 2,000㎡, 연면적 4,424㎡(지하1층, 지상3층) ❍ 사업내용 : 도서관, 장난감도서관, 주거지주차장 포함 문화시설 건립 ❍ 총사업비 : 12,986백만원【균특 6,295(48%), 시비 6,691(52%)】
④ 사업부서	문화예술과		⑤ 담당자	문화예술과장 차명신 건축7급 한양주
⑥ 선정기준	주요 시정현안사업		⑦ 사업기간	2017~2022
<그간 주요 추진내용>
○ 전라남도 지방재정투자심의의결		‘18.6.28	교육문화사업단장 심인섭 문화예술과장 이호성 문화지원팀장 최혜강 담당자 전영인
○ 용해지구 문화시설 건립계획		‘18.10.14	교육문화사업단장 심인섭 문화예술과장 이호성 문화지원팀장 최혜강 담당자 전영인
○ 설계공모 입찰공고		‘19.7.23	기획문화국장 배석인 문화예술과장 김명준 문화정책팀장 강미선 담당자 이주연
○ 기본 및 실시설계용역착수		‘19.11.11	기획문화국장 배석인 문화예술과장 김명준 문화정책팀장 강미선 담당자 이주연
○ 용해지구 문화시설 건립사업 기본계획변경		‘19.11.21	기획문화국장 배석인 문화예술과장 김명준 문화정책팀장 강미선 담당자 이주연
○ 생활soc복합화 주거지주차장 실시설계용역변경계약		‘20.1.16	관광문화국장 김영숙 문화예술과장 김명준 문화정책팀장 강미선 담당자 박현미
○ 경제성등 검토(VE) 용역 계약		‘20.2.13	관광문화국장 김영숙 문화예술과장 김명준 문화정책팀장 강미선 담당자 박현미
○ 전남도 건설기술심의위원회 심의		‘20.6.5	관광문화국장 김영숙 문화예술과장 김명준 문화정책팀장 강미선 담당자 박현미
○ 계약심의 및 일상감사(용역/공사)		‘20.10.28	관광문화국장 김영숙 문화예술과장 강광룡 문화정책팀장 서미경 담당자 이은지
○ 조달청 계약요청(용역/공사)		‘20.11.16	관광문화국장 김영숙 문화예술과장 강광룡 문화정책팀장 서미경 담당자 이은지
○ 공사 착공		‘21.3.2.	관광문화국장 김영숙 문화예술과장 강광룡 도서관운영팀장 박희경 담당자 이은지