정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(2022-68) 유달산목재체험장 조성사업
② 추진배경	목재에 관한 종합적인 지식과 정보를 제공하고 다양한 연령층을 대상으로 목재문화를 공감할 수 있는 전시공간 및 체험프로그램 개발, 운영으로 이용객 만족도 제고
③ 사업개요	○ 위 치 : 유달산 달성주차장 주변(죽교동 271-2번지 일원) ○ 사업내용 : 목재문화체험장 (부지 4,246㎡, 체험장 860㎡) ○ 추진기간 : 2018. ~ 2021. ○ 총사업비 : 3,000백만원(도비 2,400, 시비 600)
④ 사업부서	목포시 공원녹지과		⑤ 담당자		녹지7급 김현수 공원녹지과장 박진홍
⑥ 선정기준	10억 이상 예산 투입사업		⑦ 사업기간		2018. ~ 2021.
<그간 주요 추진내용>
유달산목재문화체험장 운영		‘21. 09. 04.		과 장 박진홍 책임관 김영범 실무관 김현수
유달산목재문화체험장 개관식 개최		‘21. 08. 19.		과 장 박진홍 책임관 김영범 실무관 김현수
유달산목재문화체험장 조성사업 준공		‘21. 07. 16.		과 장 박진홍 책임관 김영범 실무관 김현수
유달산목재문화체험장 기간제근로자(목공지도사) 채용		‘21. 07. 02.		과 장 박진홍 책임관 김영범 실무관 김현수
유달산목재문화체험장 관리 및 운영 조례(안) 입법예고		‘21. 03. 10.		과 장 박진홍 책임관 김영범 실무관 김현수
유달산목재문화체험장 조성사업 착공		‘20. 06. 19.		과 장 김동호 책임관 김영범 실무관 김현수
유달산목재문화체험장 발주계획 보고		‘20. 06. 02.		과 장 김동호 책임관 김영범 실무관 김현수
유달산목재문화체험장 계약심사(전남도)		‘20. 05. 27.		과 장 김동호 책임관 김영범 실무관 김현수
유달산공원 난전시관 철거계획 보고		‘20. 05. 04.		과 장 김동호 책임관 김영범 실무관 김현수

유달산목재문화체험장 건설기술심의 의견사항에 대한 조치결과 보고	‘20. 02. 06.	과 장 김동호 책임관 김영범 실무관 김현수
유달근린공원조성계획(변경) 수립용역 준공	‘19. 11. 25.	과 장 김동호 책임관 김영범 실무관 김현수
유달산목재문화체험장 제3회 목포시 건설기술심의	‘19. 11. 20.	과 장 김동호 책임관 김영범 실무관 김현수
유달산목재문화체험장 실시계획(변경)인가 신청	‘19. 11. 19.	과 장 김동호 책임관 김영범 실무관 김현수
유달근린공원조성계획(변경) 환경보전방안 마련 검토용역 준공	‘19. 11. 14.	과 장 김동호 책임관 김영범 실무관 김현수
유달근린공원조성계획(변경) 수립용역 및 환경보전방안마련 검토용역 착수	‘19. 09. 20.	과 장 김동호 책임관 김영범 실무관 김현수
유달산목재문화체험장 목포시경관위원회 심의	‘19. 09. 04.	과 장 김동호 책임관 김영범 실무관 김현수
유달산목재문화체험장 BF예비인증용역 착수	‘19. 08. 05.	과 장 김동호 책임관 김영범 실무관 김현수
건물배치도(안) 검토보고	‘19. 07. 11.	과 장 김진호 책임관 최양선 실무관 김현수
기본 및 실시설계용역 착수보고회 개최	‘19. 05. 14.	과 장 김진호 책임관 최양선 실무관 김현수
기본 및 실시설계용역 착수	‘19. 03. 21.	과 장 김진호 책임관 최양선 실무관 김현수 용역사 (주)아카라인 대표 양인승
기본 및 실시설계용역 사업수행능력(PQ)평가 제출안내 공고	‘19. 01. 03.	과 장 김진호 책임관 최양선 실무관 김현수
기본 및 실시설계용역 사업수행능력(PQ)평가 공고(안) 검토보고	‘18. 12. 19.	과 장 김진호 책임관 최양선 실무관 김현수
기본 및 실시설계용역 계약심사 및 일상감사 실시	‘18. 9. 17.	과 장 김진호 책임관 최양선 실무관 김현수
2018년 제1차(정기) 용역과제 사전심의	‘18. 9. 10.	과 장 김진호 책임관 최양선 실무관 김현수
2018년 목재문화체험장 신규조성 심사 (산림청)	‘17. 3. 31.	과 장 김진호 책임관 최양선 실무관 전욱형
지방재정 투융자심사 완료	‘15. 10. 21.	과 장 김진호 책임관 안동석 실무관 김영범