지방재정 특수공시 대상사업 목록

연번	사 업 명	추진부서	비 고
	6개 사업
1	환경에너지센터(생활폐기물전처리시설)건립	환경관리사무소
2	신흥급경사지(붕괴위험지역) 정비사업	건설과
3	도심상가 주차장조성	교통행정과
4	국제축구센터 숙소동 증축	스포츠산업과
5	목포시청각 영어도서관 조성사업	문화예술과
6	대양산단 진입도로 개설공사	도시개발과

환경에너지센터(생활폐기물전처리시설)건립

매립장 용량만료에 대비한 시설로 생활폐기물에서 가연성만을 선별하여 파쇄․건조․성형 과정을 통한 고형연료 생산 및 매립장 사용기한 연장

□ 개  요

○ 기    간 : 2010. 5. ~ 2015. 12.

○ 위    치 : 목포시 고하대로 1140-73(대양동) 일원

○ 총사업비 : 38,969백만원 (국17,250  시21,446)

- 2014년 사업비 : 5,064백만원 (국2,532  시2,532)

○ 사업내용 : 생활폐기물전처리시설 230톤/일

고형연료 제조시설 115톤/일

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2014년	2015년	2016년이후
계	38,696	21,946	5,064	4,468	7,218
국비	17,250	8,875	2,532	2,234	3,609
시비	21,446	13,071	2,532	2,234	3,609

□ ‘15년까지 추진실적

○ ‘15. 09. : 생활폐기물전처리시설 시운전 실시(3개월)

○ ‘15. 12. : 생활폐기물전처리시설 준공

□ 향후 추진계획

○ ‘16. 2. ~ ’17. 1. : 생활폐기물전처리시설 의무위탁운영(1년)

□ 기대효과

○ 생활폐기물을 전처리 후 고형연료를 생산하여 공급함으로써 자원순환형 폐기물 관리체계 구축 및 매립장 사용기간 연장

□ 위 치 도

□ 완공사진 (조감도)

신흥급경사지(붕괴위험지역) 정비사업

2013년 붕괴위험지구로 지정된 신흥동 도로절개지의 항구적인 복구를 위하여 신흥동 도로절개지 정비사업 추진

□ 개  요

○ 기    간 : 2014. 4 〜 2015. 12.

○ 위    치 : 목포시 상동 목포스포츠〜선응사간

○ 총사업비 : 2,500백만원 (국 1,250,  시 1,250)

- 2014년 사업비 : 690백만원 (국 200,  시 490)

○ 사업내용 : L=155m, H=10~20m 보수보강(사면완화 및 식재공)

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2014년	2015년	2016년이후
계	2,500	50	690	1,760	-
국비	1,250	-	200	1,050	-
도비	-	-	-	-	-
시비	1,250	50	490	710	-

□ ‘15년까지 추진실적

○ 2013. 3. : 급경사지 붕괴위험지역 지정고시

○ 2014. 4. : 실시계획인가 고시

○ 2014. 5 ～ 2015. 2. : 편입토지 및 지장물 보상 완료

○ 2015.  3. : 공사 착공

○ 2015. 12. : 공사 준공

□ 기대효과

○ 붕괴위험지역 절개지 보수보강으로 인한 사전재해 예방

○ 차량, 보행자 등의 안정된 환경개선 및 재산피해 보호

□ 위 치 도

백련대로

광장주유소

신흥동 급경사지 붕괴위험지역

신흥동주민센터

선응사

입암산

□ 완공사진

도심상가 주차장 조성

도심상가 인근에 공영주차장 및 소규모 주차장을 조성하고 상가 근거리 자투리땅 등을 적극 활용 시민 주차편의 제공

□ 개  요

○ 기  간 : 2014. 7. ~ 2016. 12.

○ 조  성

구 분	사업비(백만원)	면적(㎡)	면수
계	4,736	13,010	462
버스터미널 옆	1,350	2,703	64
하당 놀부정 주변	906	1,479	52
고하대로변(차관주택 주변)	740	930	30
차관주택 내 갓길 주차	300	1,720	72
자유시장 주차장 확장	750	1,651	76
동부시장 주차장 확장	600	3,177	123
소규모 동네주차장 조성	90	1,350	45

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구 분	총사업비	2015년까지	2016년	비고
계	4,736	1,880	2,856
버스터미널 옆	1,350	904	446
하당 놀부정 주변	906	906	-
고하대로변(차관주택 주변)	740	-	740
차관주택 내 갓길 주차	300	-	300	단기 사업
자유시장 주차장 확장	750	30	720
동부시장 주차장 확장	600	-	600	단기 사업
소규모 동네주차장 조성	90	40	50	단기 사업

□ 추진상황 및 추진계획

○ 버스터미널 옆 주차장 조성

- '16. 6 : 지장물 철거(1차분, 1,630㎡) 완료  -‘16. 9 : 1차분 조성 완료

○ 하당놀부정 주변 주차장 조성

- '16. 7 : 지장물 철거 및 보조기층 포설하여 임시 주차장 조성

○ 고하대로변(차관주택 주변) 주차장 조성

- ‘16. 7 : 부지선정 협의 및 실시설계   - 제1회 추경 사업비 확보 예정

○ 차관주택 내 갓길 주차 조성 : ‘16. 7 ~ 9 실과 협의 및 조성

○ 자유시장 주차장 확장 : '16. 10 확장 완료

○ 동부시장 주차장 확장 : '16. 10 확장 완료

○ 소규모주차장 조성 : '16. 10 조성 완료

목포국제축구센터 숙소동 증축사업

각종 대회 및 전지훈련 성수기에 부족한 숙소를 목포국제축구센터 내

증축하여 연중 전지훈련팀 편의제공 및 엘리트 선수 육성 축구발전 기여

□ 개  요

○ 기    간 : 2015. 2월 ～ 2016. 5월

○ 위    치 : 목포시 대양동 950번지(목포국제축구센터 내)

○ 총사업비 : 800백만원 (국 240, 시 560)

○ 사업내용 : 숙소동 증축(연면적 499㎡, 지상2층, 10실 88명 수용)

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년이후
계	800		800
국비	240		240
도비	-
시비	560		560

□ ‘15년까지 추진실적

○ '15. 02월 : 국제축구센터 숙소동 증축 보조금(출연금)지원 결정

○ '15. 09월 : 설계용역 및 관련 행정절차 이행

○ '15. 10월 : 건축공사 발주 및 착공

□ 향후 추진계획

○ '16. 05월 : 건축공사 완공(도시계획사업 완료)

○ '16. 06월 : 보조사업 정산 및 시설운영(활용)

□ 기대효과

○ 목포국제축구센터 숙소 수용인원 증가로 관련 시설이용률 향상

○ 외부 전지훈련팀 편의제공 및 유치로 지역경제 활성화 기대

□ 위 치 도

목포국제축구센터

숙소동 증축예정지

□ 완공사진

목포 시청각영어도서관 건립공사

○ 글로벌시대, 영어 특성화 도서관을 조성하여 지역간 독서·교육·문화 격차 해소

○ 자신의 수준에 맞는 도서를 쉽고, 재미있게 읽을 수 있도록 열린 교육 공간 제공

□ 개  요

○ 기    간 : 2015. 6 ~ 2015. 6(‘14. 12월 착공)

○ 위    치 : 목포시 옥암로186번길 30-11(어린이도서관 옆)

○ 총사업비 : 2,514백만원 (국 1,000. 시 1,514)

- 2014년 사업비 : 2,000백만원 (국 1,000, 시 1,000)

○ 사업내용 : 부지 2,476㎡, 연면적 935.03㎡(지상2층)

-  1 층 : 영어도서열람실&교육실, 어린이놀이방, 북카페

-  2 층 : 스터디룸, 멀티룸, 다목적강의실, 사무실 등

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년이후
계	2,514	108	1,881	525	-
국비	1,000		1,000
도비
시비	1,514	108	881	525

□ ‘15년까지 추진실적

○  ‘13. 10. ~′14. 10. : 기본 및 실시설계용역 완료

○  ‘14. 12. ~′15.  6. : 공사 착공 및 준공

□ 향후 추진계획

○  ‘16.  1. ~ ’16.  3. : 영어도서관 집기류 등 비품구입 비치

○  ‘16.  3.           : 영어도서관 개관

□ 기대효과

○ 세계의 친구들과 생각을 나눌 수 있는 기회 제공 및 글로벌 인재양성

○ 다양한 영어전문 도서 비치로 영어독서를 통한 영어능력 향상

□ 위 치 도

□ 완공사진 (조감도)

대양산단진입도로 개설공사

대양일반산업단지 조성에 따른 물동량과 차량통행 증가로 예상되는 교통지체를 예방하여 원활한 차량소통 위한 진입도로 개설

□ 개  요

○ 기    간 : 2011. 1. 24 ~ 2016. 4. 15

○ 위    치 : 목포시 용해동, 연산동, 대양동 일원

○ 총사업비 : 44,225백만원 (국 44,225)

- 2014년 사업비 : 7,256백만원 (국 7,256)

○ 사업내용 : 도로개설

- 본선 L=1,334m, B=25.0~30.0m [교량 105m 포함]

- 램프 L=1,132m, B=6.0m [교량 224m 포함]

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2014년	2015년	2016년이후
계	44,225	24,209	7,256	9,118	3,642
국비	44,225	24,209	7,256	9,118	3,642
시비	-	-	-	-	-

□ ‘15년까지 추진실적

○ ´10. 11. 05 : 실시계획 승인

○ ´11.  1. 24 : 착공(교량공, 연약지반처리, 발파 등 추진)

○ ´14.  1.  2 : 공법변경(터널⇒개착)에 따른 실시계획 변경 승인

○ ´14.  4.    : 남측 주진입도로 토공 및 시설물 설치

○ ´15. 12.    : 진입도로 본선 및 남측 주진입도로 포장 완료

□ 향후 추진계획

○ ‘16.  4. 15 : 공사 준공

○ ‘16.  8.    : 사업준공 추진

□ 위 치 도

□ 완공사진